ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ.

1. В период с	«	09	»	марта		2022	г. по «	13	»	сентября		2022	г. в отношении	
объектов недвижимости, расположенных на территории: Архангельская область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», кадастровый квартал: 
– 29:28:506001 садовое некоммерческое товарищество «Волна» и садовое некоммерческое товарищество «Спектр»;
– 29:28:603004 садовое некоммерческое товарищество «Дружба»	
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы 2)
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальными контрактом от 09.03.2022 № 007-22-УГиЗО
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: Администрация Северодвинска

почтовый адрес:  164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7

адрес электронной почты:	ozo@adm.severodvinsk.ru;	
номер контактного телефона:	8(8184)582122 8(8184)583545    	
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица: Общество                с ограниченной ответственностью «Бюро кадастровых услуг» 	;
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Петров Андрей Александрович;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Профессиональный Центр Кадастровых инженеров»;	
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров:  0546 ;	

дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 25.08.2016;

почтовый адрес: 
164501 Архангельская область, город Северодвинск, ул. Плюснина, д. 5;

адрес электронной почты:   geodezist29@mail.ru; petrovsev@yandex.ru	;

номер контактного телефона:   8 (953) 260 40 60; 8 (902) 191 76 67	.

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (опубликовано в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф) вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№
п/п	Место выполнения 
комплексных кадастровых работ	Время выполнения 
комплексных кадастровых работ	
	Архангельская область, городской округ Архангельской области «Северодвинск» кадастровые квартала 29:28:506001, 29:28:603004. 	В период с 09.03.2022 г. по 13.09.2022 г. 	
№	Даты и сроки	Работы	Результат	
1.		Подготовительные работы	
1.1	в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения контракта 	1. Направление извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Подрядчик)
2. Подрядчик проводит сбор и анализ исходных данных.	Письмо в адрес Заказчика, содержащее:
1) сведения, подтверждающие получение Подрядчиком исходных картографических и геодезических данных;
2) сведения, подтверждающие наличие необходимых документов, указанных в части 6 статьей 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ для проведения работ;
3) сведения об уведомлении правообладателей объектов недвижимости, являющихся в соответствии с частью 1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ объектами комплексных кадастровых работ, и иных заинтересованных лиц о начале таких работ;
4) информацию о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенных земельных участках в соответствии с частями 4, 4.1 статьи 42.6 Федерального закона № 221-ФЗ.
	
1.2	в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения контракта	1. Формируется согласительная комиссия (Заказчик);
2. Подрядчик проводит обследование территории комплексных кадастровых работ;
3. Подрядчик проводит геодезическую съемку территории комплексных кадастровых работ;
4. Подрядчик подает заявление о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав.		
1.3	в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня опубликования извещения	1. Сбор информации от правообладателей объектов недвижимости адресов их регистрации и соответствующих документов на объекты недвижимости.		
2.	Основные работы:	
	Подготовка проектов карт-планов территории. 
До 27.06.2022
	1.Обследование Подрядчиком объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости, проведение, проведение геодезических работ территории кадастровых кварталов;
2.	Осуществление определения координат характерных точек местоположения границ объектов недвижимости;
3.	Выполнение мероприятий, связанных с оповещением правообладателей объектов недвижимости, заинтересованных лиц о проведении в соответствующих кадастровых кварталах комплексных кадастровых работ;
4.	Подготовка проектов карт-планов территории; 
5.	Проверка карт-планов территории на соответствие сведениям Единого государственного реестра недвижимости с использованием сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера».	Проект карты-плана территории по каждому кадастровому кварталу	
3.	Согласование и утверждение проекта карты-плана территории:	
3.1.
	До 30.06.2022

	1. Направление Подрядчиком подготовленных проектов  карт-планов территории на рассмотрение Заказчику;
2. Направление Заказчиком проектов карт-планов территории в согласительную комиссию;
3. Направление Заказчиком извещения о проведении заседания согласительной комиссии	Согласованная согласительной комиссией и утвержденная заказчиком карта-план территории 
	
	До 21.07.2022	4. Проведение первого заседания согласительной комиссии, в том числе с участием Подрядчика.		
3.2.	в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с первого заседания согласительной комиссии	Прием и рассмотрение возражений относительно местоположения границ земельных участков, а также согласия правообладателя земельного участка, предусмотренного частью 5 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ.		
	До 26.08.2022	Проведение второго заседания согласительной комиссии с участием Подрядчика		
3.3.	в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения второго заседания согласительной комиссии	1. Оформление Подрядчиком карты-плана территории                         в окончательной редакции не позднее 05.09.2022.
2. Согласительная комиссия направляет Заказчику комплексных кадастровых работ для утверждения оформленный Подрядчиком проект карты-плана территории в окончательной редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания согласительной комиссии.		
3.4.	в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения карт-планов, но не позднее 13.09.2022	Заказчик комплексных кадастровых работ по результатам рассмотрения представленного Подрядчиком проекта карты-плана территории утверждает карту-план территории. 		
3.5.	В течение 5 рабочих дней с даты утверждения карт-планов	Заказчик письменно уведомляет Подрядчика об утверждении карты-плана территории.		
4	Приемка работ
	1.Подрядчик формирует с использованием единой информационной системы  и размещает в документ о приемке. 
2.Приёмка результатов выполненных работ осуществляется в соответствии со статьей 94 Федерального закона № 44-ФЗ 05.04.2013г «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.	приемка работ